Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na rokovanie
Miestnej rady
30. 06. 2015

Stav investičných akcií v roku 2015

Predkladateľ :			Materiál obsahuje :	

Ing. Mgr. Ľubomír Baník		
1.	Návrh uznesenia	
prednosta Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto		2.	Vlastný materiál	

Spracovatelia:		Stanovisko právnej skupiny:	

Ing. Peter Majtán		
-	nie je potreba právneho posúdenia	
vedúci oddelenia VaI, VS, SB a NP

Ing. Jozef Adam

Ing. Robert Sedlačko

Ing. arch. Miloslav Šimánek

referenti oddelenia VaI, VS, SB a NP			

			

Jún 2015
N á v r h    u z n e s e n i a:

Miestna rada berie na vedomie stav investičných akcií v roku 2015:

a)  s pripomienkami

b)  bez pripomienok

1.	Informácia

INVESTIČNÉ AKCIE	ROZPOČET	ČERPANIE	ZOSTATOK	STAV k 8.6.2015	POPIS AKCIE	
PD - Revitalizácia parku na Rač. Mýte       	20 880,00	 	20 880,00	Akcia prebieha	Podkladom pre projektovú dokumentáciu je úspešný súťažný návrh architektov 2ka, s.r.o. iba na časť Račianskeho Mýta,  a to časť, ktorú má  MČ BANM zverenú od Magistrátu.  Projekt sa spracúva aktuálne je odovzdaná dokumentácia na UK a prebieha inžiniering, Projekt rieši rekonštrukciu parku sa týka spevnených plôch, revitalizácie zelených plôch, drevín a drobnej architektúry. 	
PD-Nový šport park (bývalý cykloštadión)      	28 000,00	 	28 000,00	Akcia je aktuálna 	Aktuálne prebieha spracovanie PD na základe súťažného návrhu od architektov Atelier BAAR s.r.o., Architekti  majú spracovanú dokumentáciu na UK. Prebieha inžiniering	
AD-Revit. parku Sadová                           	980,00	0 	980,00	Čerpanie položky bude po ukončení akcie.	Autorský dozor.	
Inžinierská činnosť                        	10 000,00	 	10 000,00	 Akcia prebieha 	Na všetky akcie zahrnuté do rozpočtu, inžinoierska činnosť prebieha na park Račianske mýto, park Voľnočasový priestor Jama, KD Športová,	
Real-Revital.VP Osadná/Rešetková ISRMO       	371 500,00 	43 156,27	328 343,73	Prebieha realizácia. Plánovaný termín ukončenia 06/2015.	Komplexná rekonštrukcia VP vrátane terénnych úprav, spevnených plôch, hracích prvkov a mobiliáru ako aj sadových úprav.	
Real-Rekonštrukcia komunitného centra Ovručská ISRMO 	220 000,00	0 	220 000,00	Stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané 29.3.2015. Plánované ukončenie stavby je 08/2015	Komplexná rekonštrukcia jestvujúceho objektu pre potreby komunitného centra.	
Real-Revital. VP Park Hálkova ISRMO        	333 000,00	113 836,42 	219 163,58 	Akcia ukončená	Aktuálne prebieha odovzdanie   parku spoločnosťou  AVA stav s.r.o.,	
Real-Revitalizácia parku Sadová           	18 000,00	0 	18 000,00	Revitalizácia parku sa realizovala v roku 2014, v súčasnosti sa realizujú dokončovacie práce. Predpokladané dokončenie stavebných prác je 20.6.2015.	V rámci revitalizácie boli všetky povrchové vrstvy vybraté a nahradené novými vrstvami, ktoré zahŕňajú nové vrstvy spevnených plôch a zatrávnených plôch. Spolu s nahradením pôvodných vrstiev budú nahradené aj postihnuté stromy. Plocha nefunkčnej fontány bola využitá na osadenie novej fontány. Revitalizácia zahŕňa okrem toho aj nové parkové lavičky, kryté kontajnerové stojisko, osvetlenie parku a úpravu parkovacích  miest.	
PD-MŠ Za kasárňou                     	20 000,00	0 	20 000,00	Pripravuje sa PD na stavebné povolenie.	Zámerom je vybudovať MŠ za Kasárňou na určenej ploche z časti aj na CO kryte. MŠ bude napojená na pôvodnú jedáleň. Navrhované koncepty škôlky riešili  2-3 triedy s výdajom stravy zhromažďovacím priestorom , multifunkčným priestorom, šatňami a priestorom dvora.	
Real-Rekonštrukcia MŠ na Revíne             	185 000,00	155 067,00 	29 933,00	Stavba bola začatá v roku 2014 a ukončená v 03/2015	Predmetom stavby je zateplenie a prespádovanie plochej strechy (poruchy atikových múrov pri odtokoch dažďových vôd cez ne), nová povlaková krytina, oprava statických porúch na jednotlivých objektoch MŠ, vrátane prepojovacej chodby, úprava okenných otvorov a výmena okien a z dôvodu nevyhovujúcej teplotechniky, zateplenie fasády celej MŠ. 	
Real-Obnova ZŠ s MŠ Za kasárňou ISRMO        	992 683,22	 	497 928,03	prebieha realizácia	Realizácia vychádza z PD- za účelom zefektívnenia energetickej hospodárnosti budov. Objekty budú zateplené, plánuje sa  výmena okien a výmena strešných krytín. Spevnená plochy  ihrisko. Realizácia aktuálne prebieha zhotoviteľom Molda s.r.o.	
Real-Obnova ZŠ s MŠ Riazanská ISRMO       	700 000,00	492 773,10	207 226,90	Prebieha realizácia stavby. Práce začali 02/2015 a plánované ukončenie je 06/2015.	oprava strechy, fasády vrátane okenných a dverných výplní na objektoch ZŠ Riazanská a MŠ Letná	
Real-Obnova ZŠ s MŠ Česká ISRMO              	520 000,00	352156,00 	167 844,00	Stavba bola začatá v 11/2015 a ukončená v 05/2015	oprava strechy, fasády vrátane okenných a dverných výplní na objektoch ZŠ Česká, MŠ Rešetkova a MŠ Osadná	
Real-Obnova ZŠ s MŠ Odborárska ISRMO         	745 400	124 640,52	620759,48	Akcia prebieha	Aktuálne prebieha realizácia ZŠ a Telocvične  vrátane exteriérových plôch A športovísk  spol. Molda. s.r.o.
Objekt školy a exteriérových plôch je dokončený, čakáme na súhlas na zmenu statiky od  kontrolného orgánu.	
PD-KD Športová                                	4 000,00	3060 	940	Prebieha kompletizácia PD a inžinierska činnosť	PD rieši rekonštrukciu KD v rozsahu: dispozičné zmeny, interiér, nová terasa, bezbariérový vstup. Akcia hotová 	
Kanalizácia Sliačska - prekládka	10 000,00	0	10 000,00	Prebieha VO na zhotoviteľa.	Prekládka kanalizačnej prípojky.	
MŠ Letná – kanalizačná prípojka	20 000,00	0	20 000,00	Pripravuje sa VO na zhotoviteľa.	Vybudovanie novej kanalizačnej prípojky pre MŠ (nová trasa).	
Gymnázium Česká – rekonštrukcia strechy	140 000,00	0	140 000,00	Pripravuje sa VO na zhotoviteľa.	Rekonštrukcia a zateplenie strechy gymnázia.